별첨4) 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

산업단지 다목적 체육관 건립

담당자

지역경제과 강종선(☎860-2856)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 근로자·주민들이 상시 체육활동을 할 수 있는 생활체육공간을 조성하여 신체적, 정신적, 사회적 건강 향상 및 행복을 증진하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2023. 6.

○ 위 치 : 구로구 디지털로26길 87(한국산업기술시험원 부지 내)

○ 규 모 : 부지 980㎡, 연면적 4,966㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,648백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,648	4,287	405	1,000	13,956
국 비	5,500		405	1,000	4,095
시 도 비	3,000				3,000
시군구비	6,883	22			6,861
민간자본	4,265	4,265

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 2019. 3. 5 : ’19년 생활체육시설 공모사업 선정

○ 2019. 7. 3 : 한국산업기술시험원 부지 임대차 계약 체결

○ 2019.10.25 : 구로구 지방재정영향평가

○ 2019.11. 1 : 서울시 지방재정투자심사

○ 2019.12.16 : 구로구 공유재산관리계획 승인

○ 2020. 5. 8 : 설계용역 발주

○ 2020. 8.12 : 기본설계 변경

○ 2020.10.~21.5. : 공공건축물 경관심의, 설계경제성(VE)검토, 건설기술심의

○ 2021.6.8 : 소규모 지하안전영향평가 용역 시행

□ 향후계획

○ 2020.5.18.~2021.9 : 실시설계

○ 2021.12.   ~2023.6 : 공사시행

○ 2023.6.30 : 완공(예정)

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 규모 4,200㎡(지하1층/지상5층), 총사업비 17,192백만원, 기간 2019.3.~2021.12.

○ 변경 : 규모 4,966㎡(지하2층/지상5층), 총사업비 19,648백만원, 기간 2019.3.~2023.6.

사업명

구로구 지역자활센터 및

뇌병변장애인비전센터 건립

담당자

사회복지과 한상이(☎860-2826)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근로능력이 있는 저소득층에게 체계적인 자활 서비스를 제공하고 뇌병변 장애인들의 자립을 돕기 위해 지역자활센터 및 뇌병변비전센터를 건립하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ~ 2022. 5. (22개월)

○ 위 치 : 구로구 구로동로42길 43(구로동) 낙원교회

○ 규 모 : 대지면적 450㎡, 연면적1026.67㎡, 지하1층/지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,777백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
시군구비	5,777	-	365	3,222	2,190

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020.  8. : 구로구지역자활센터 건립계획 확정

○ 2020. 12. : 투자심사 및 관리계획 확정

○ 2021.  2. : 부동산 매매계약(33억) 완료

○ 2021.  4. : 공공건축심의 완료(조건부 가결)

○ 2021.  5. : 계약심사완료(적절)

○ 2021.  6. : 설계공모 공고

□ 향후계획

○ 2021.  7. : 실시설계

○ 2021. 10. : 착공 예정

사업명

항동중 학교시설 복합화

담당자

교육지원과 윤대성(☎860-2246)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항동중학교 부지를 활용하여 개방형 체육관을 건립함으로써 양질의 교육환경을        조성하고, 주민들에게는 생활체육공간을 제공하여 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 8. ∼ 2020. 3.

○ 위 치 : 서울특별시 구로구 연동로 239-2

○ 규 모 : 907.8㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,063백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,063	2263	800	-	-
국 비	1,531.5	1531.5	-	-	-
시 도 비	200	200	-	-	-
시군구비	1,331.5	531.5	800	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 3.

- 2차 보조금 교부 (800백만원)

- 완공 및 개교

□ 향후계획

○ 학생교육활동에 지장이 없는 범위에서 지역주민 개방

- 학교장은 교육활동 및 학생안전과 재산관리에 지장이 없는 범위 내에서

사용기간과 시간을 정하여 학교시설 개방

사업명

IOT 미래교실 구축 지원사업

담당자

교육지원과 임자영(☎860-3396)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코딩 등 융합형 분야를 공부할 수 있는 학습 환경을 제공하여 4차 산업시대를       이끌어나갈 창의적인 인재 양성에 보탬이 될 수 있도록 사물인터넷(IoT)            인프라를 갖춘 미래형 교육환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ∼ 2022. 12.

○ 위 치 : 구로구 소재 26개 초등학교

○ 규 모 : 2,400㎡

- 150㎡/1실 × 16개교 = 2,400㎡ (1개교 각 1실 16개교에 16개실 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
시군구비	1,600	300	300	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68 %)

(단위 : 천원)

구분	2019년	2020년	2021년
대상 학교(수)	3개교 (신미림초, 매봉초, 오정초)	3개교 (신도림초, 신구로초, 천왕초)	5개교 (동구로초,영일초,고척초, 개웅초 오류남초)
소요예산	300,000	300,000	500,000

□ 향후계획

○ 시 교육청과 긴밀한 협조를 통해「미래형 교실 사업」과 연계 추진

○ 초등학교 참여 저조 시, 대상 학교의 범위를 중학교까지 확대 실시

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	2020
수요예측	26개교	16개교
총사업비	2,600백만원	1,600백만원

사업명

구로창의문화예술센터 건립

담당자

교육지원과 김세은(☎860-3026)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4차 산업 신기술을 융합한 새로운 문화·예술 콘텐츠를 제공하는 독창적인    시설을 조성하여 구로구민의 문화체험 기회를 확대하고 삶의 질을 높이고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 11. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 서울특별시 구로구 고척동 63-15외 5필지

○ 규 모 : 부지 1,801㎡, 연면적 3,496.19㎡ (지하1층, 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,692백만원(국유지매입으로 총사업비 증가)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,692	7,793	1,292	8,112	3,495
시 도 비	15,888	7.398	1,292	4,575	2,623
시군구비	4,804	395		3,537	872

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018.11.~2019. 1.: 업무이관 및 사업계획 변경

○ 2019. 2.28. : 구로 창의문화예술센터(舊 미디어아트센터) 건립 기본계획 수립

○ 2019. 6.10. : 서울특별시 제2차 투자심사 통과

○ 2019.12.10. : ‘구로창의문화예술센터 건립’ 설계용역 발주

○ 2020. 3.24. : 區공유재산 심의회 심의

○ 2020. 4.24. : 공유재산관리계획 구의회 승인

○ 2021. 2.28. : 설계용역 완공

○ 2021. 6.    : 발주 및 시공사 계약

○ 2021. 6.30. : 착공

□ 향후계획

○ 2022. 11. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 서울시 공공건축물 책정 가이드라인 변경 및 건설사업관리용역 신설, 용지매입비 추가 부담등으로 3,700백만원 초과 소요예정

사업명

구로중앙로 지중화

담당자

건설관리과 송진숙(☎860-3106)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구로중앙로 구간 공구상가 및 구로역의 가공배전선로·통신선로를 지중화하여          도시미관을 개선하고 안전한 보행환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 구로동 1262~구로동 604-19

○ 규 모 : 연장 약 0.7㎞(양방향)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,921백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,921	-	-	4,328	593
시 도 비	1,135	-	-	972	163
시군구비	1,516	-	-	1,462	54
민간자본	2,270	-	-	1,894	376

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020.7. : 구로중앙로 지중화 사업계획서 제출(구→서울시,한전)

○ 2020.10. : 구 투자심사

○ 2020.12. : 사업승인(한전→구)

○ 2021.2.~6. : 지중화사업협약체결(한전,KT,통신사) 및 자치구 분담공사비 납부

○ 2021.2.~6. : 공사 실시설계

□ 향후계획

○ 2021.7~8. : 시공사 선정 및 계약체결(한전,KT,통신사)

○ 2021.8~9. : 착공(예정)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경(2021.1.~12. →2021.1.~2022.12.)

사업명

가리봉동 중심도로개설

담당자

도로과 송재경(☎860-2257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가리봉동 중심도로(우마2길)는 폭4~6m 도로폭으로 협소하여 차량 및

보행인의 통행불편을 주고 있으며, 가족통합지원센터 건립, 우마길 문화거리 조성,

가리봉시장 현대화사업 등과 관련, 원활한 교통소통 및 지역발전을 위해 기존 도로를 확장하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 가리봉동 115-12~123-35

○ 규 모 : 도로개설 폭8m, 연장377m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,000	13,000	3,000	-	-
국 비	800	800	-	-	-
시 도 비	5,800	2,800	3,000	-	-
시군구비	9,400	9,400	-	-	-

□ 추진상황(공정율 95%)

○ 2017. 4.13. : 실시계획인가(폭8m, 연장 17m)

○ 2017. 7.27. : 1차구간 실시계획변경인가(연장17→255m)

○ 2017.12.28. : 실시설계용역준공(착수 '17.04.03)

○ 2018. 2.22. : 2차구간 실시계획변경인가(연장255→377m)

○ 2018. 3.27. : 공사발주(장기계속공사)

○ 2019. 5. 7. : 공사준공(2018년도분)

○ 2019.12.27. : 공사준공(2019년도분)

○ 2021. 7.    : 공사시행 중

□ 향후계획

○ 2021. 7.~ 2021.12. : 공사시행 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 14,000백만원 → 변경 16,000백만원

○ 사업기간 : 당초 2017~2019 → 변경 2017∼2021

사업명

구로5동 밤동산마을진입로개설

담당자

도로과 김기정(☎860-3126)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로의 개설을 통하여 통행불편 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 구로동 557-17~551-97

○ 규 모 : 도로개설 폭8m, 연장260m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600	2,605	845	150	-
국 비	200	200	-	-	-
시 도 비	478.75	-	478.75	-	-
시군구비	2,921.25	2,405	366.25	150	-

□ 추진상황(공정율 : 95%)

○ 2016. 3.~ 2017. 3. : 1차구간 보상완료(폭8m,연장55m)

○ 2017. 3.16. : 2차구간 실시계획인가(폭8m,연장50m)

○ 2017. 5.29. : 1차구간 도로개설 완료(폭8m, 연장55m)

○ 2017. 7.20. : 3차구간 실시계획인가(폭8m,연장40m)

○ 2018.10.12. : 2차구간 도로개설 완료(폭8m, 연장50m)

○ 2019.12.16. : 3차구간 도로개설 완료(폭8m, 연장40m)

○ 2020. 4.23. : 4차구간 실시계획인가(폭8m, 연장115m)

○ 2020. 6.11. : 도시계획시설(도로)변경 결정

○ 2021. 7.    : 보상 시행 중

□ 향후계획

○ 2021. 7. ~ 2021.12. : 보상 및 공사시행

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 5,000 → 변경 3,600

○ 사업기간 : 당초 2016년~2018년 → 변경 2016년∼2021년

사업명

연동로 도로확장 공사

담당자

도로과 송재경(☎860-2257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항동 공동주택지구의 조성과 항동수목원의 활성화에 따라 차량 및 보행환경개선을 위한 도로확장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 오류동108-75 ~ 항동222

○ 규 모 : 도로확장 폭8m→12m, 연장700m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	3,005	1,395	3,600	-
국 비	500	500	-	-	-
시 도 비	2,035	1,000	1,035	-	-
시군구비	5,465	1,505	360	3,600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 1991. 7.16 : 도시계획시설(도로) 결정(폭8m)

○ 2000.11.24 : 도시계획시설(도로) 변경결정(폭8m → 12m)

○ 2017. 8.10 : 도시계획시설(도로) 인가(1차)

○ 2018.11.29 : 도시계획시설(도로) 인가(2차)

○ 2018.12.10 : 도시계획시설(학교)세부시설조성계획 변경결정

○ 2020.12. 2 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 7.~2021.12. : 공사시행 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2017년~2019년 → 변경 2017년∼2021년

사업명

구일초등학교주변 도로개설공사

담당자

도로과 이지원(☎860-3124)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로의 개설을 통하여 통행불편 및 주민숙원을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위 치 : 구로동 685-512 ~ 685-201

○ 규 모 : 도로개설 폭10m, 연장81m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,430	2,430	-	-	-
시군구비	2,430	2,430	-	-	-

□ 추진상황(공정율 : 100%)

○ 1973.11.26. : 도시계획시설(도로)결정

○ 2016.5.~10. : 1차 구간 일부보상완료(188㎡중 5㎡)

○ 2017.12.14. : 1차 구간(토지188㎡중 183㎡) 보상완료

○ 2018.5.~10. : 1차구간(폭2.2m, 연장81m) 공사시행

○ 2018.12.20. : 2차구간(폭1.5m, 연장81m, 124㎡) 보상완료

○ 2018.11.22. : 3차구간 실시계획인가(폭2.3m, 연장81m)

○ 2019. 1.16. : 3차구간 일부 보상완료(184㎡중 87㎡)

○ 2019. 2.14. : 3차구간 실시계획변경인가(184㎡중 97㎡)

○ 2019. 4.30. : 3차구간 보상완료(184㎡중 97㎡)

○ 2019.11. 6. : 2차, 3차구간(폭3.8m, 연장81m, 308㎡) 공사완료

○ 2020. 1.16. : 도시계획시설(도로)사업 완료공고

○ 2020. 7. 2. : 도시계획시설(도로) 실효고시

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 4,050 → 변경 2,430

○ 사업기간 : 당초 2017년~2019년 → 변경 2017년∼2021년

※ 장기미집행 도시계획시설(도로) 실효에 따른 사업구간 축소

사업명

고척동 229-1~산 8-1 도로개설

담당자

도로과 임채윤(☎860-3128)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공원으로 진입하는 좁은 산책로의 개설로 지역의 교통여건개선 및 접근성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고척동 229-1 ~ 산 8-1

○ 규 모 : 도로개설 폭6m, 연장100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,180	-	700	1,260	220
시도비	980	-	350	630	-
시군구비	1,200	-	350	630	220

□ 추진상황(공정율 : 30%)

○ 1974. 1.14 : 도시계획시설(도로)결정

○ 2020. 8.20 : 실시계획인가를 위한 열람공고

○ 2020.10.29 : 도시계획시설(도로) 실효

○ 2020. 1. 7 : 도시계획시설(도로) 재결정

○ 2021. 2.25 : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가 고시

○ 2021. 7.   : 보상 및 공사시행

□ 향후계획

○ 2021. 7.~      : 보상시행

○ 2022. 12.       : 도로개설 완료

사업명

오류초교 주변 도로개설공사

담당자

도로과 김기정(☎860-3126)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오류초등학교 주변 미집행도로의 도로개설을 시행하여 통학로 확보하고 보행불편 및 주민숙원을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 오류동 13-228 ~ 16-1

○ 규 모 : 도로개설 폭6m, 연장95m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,340백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,340	-	800	1,205	335
시도비	1,002.5	-	400	602.5	-
시군구비	1,337.5	-	400	602.5	335

□ 추진상황(공정율 : 30%)

○ 1969. 1.18 : 도시계획시설(도로)결정

○ 2020. 8.20 : 실시계획인가를 위한 열람공고

○ 2020.10.16 : 중앙토지수용위원회 기각(실효대상시설)

○ 2020.10.29 : 도시계획시설(도로) 실효

○ 2020. 1. 7 : 도시계획시설(도로) 결정고시

○ 2021. 2.25 : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가·고시

○ 2021. 4.29 : 도시계획시설(도로) 실시계획 변경인가·고시

○ 2021. 7.   : 보상시행

□ 향후계획

○ 2021. 7.~      : 보상시행

○ 2022.12.        : 도로개설 완료

사업명

오류시장 주변 도로개설공사

담당자

도로과 이지원(☎860-3124)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오류시장 주변 미집행도로의 도로개설을 시행하여 통학로 확보하고 보행불편 및 주민숙원을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 오류동 25-41 ~ 37-9

○ 규 모 : 도로개설 폭6m, 연장 140m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,000	-	-	300	8,700
시군구비	9,000	-	-	300	8,700

□ 추진상황(공정율 : 5%)

○ 1969. 1.18 : 도시계획시설(도로)결정

○ 2020. 7. 2 : 장기미집행 도시계획시설(도로) 실효고시

○ 2020. 8.28 : 구청장지시사항(NO586. 오류시장 내 도로개설 검토)

○ 2020. 9. 8 : 도시계획시설(도로)사업 시행계획 방침(구청장)

○ 2021. 4.   : 도시계획시설(도로)결정

○ 2021. 7.   : 보상시행

□ 향후계획

○ 2021. 7.~      : 보상시행

○ 2023.12.        : 도로개설 완료

사업명

개봉배수분구 하수관로 종합정비

담당자

치수과 김명현(☎860-3160)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후불량 하수관로를 정비하고, 기능미비 관로의 성능개선 및 효율적인 유지관리로 도시환경 개선 및 침수를 예방코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 5.20. ~ 2022.12.30.

○ 위 치 : 개봉1동, 고척1, 2동

○ 규 모 : D300mm~□2.0×2.0m, L=15.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,603백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,603	8,000	6,000	5,000	11,603
시 도 비	30,603	8,000	6,000	5000	11,603

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2013.10.14. : 서울시 투자심사

○ 2014. 5.20.~2015.12.31. : 실시설계용역 시행

○ 2015. 8.24. : 서울시 투자심사(2단계)

○ 2016. 4.23.~2016.12. 5. : 개봉사거리주변외 1개소 하수관거 정비공사 시행

○ 2017. 5.23. : 배수분구 종합정비사업(기존) 추진계획 통보(서울시)

○ 2018. 3.13.~ 4. 2. : 배수분구 종합정비 물량조정 협의(市)

○ 2018. 9.28.~2019. 8.31. : 개봉배수분구 종합정비사업(1차) 완료

○ 2019. 2.25.~2019.12.20. : 개봉배수분구 종합정비사업(2차) 완료

○ 2020. 2.11.~2020.12.20. : 개봉배수분구 종합정비사업(3차) 완료

○ 2021. 2.10.~2021.12.23. : 개봉배수분구 종합정비사업(4차) 시행

□ 향후계획

○ 2022. 2.~12. : 개봉배수분구 종합정비사업(5차)시행 및 완료

사업명

오류천 단면부족구간 개선(1,2공구)

담당자

치수과 김철홍(☎860-3156)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오류천 복개구조물 단면부족 구간의 통수단면을 확보하여 항구적으로 침수우려를 해소하고 개거하천 복개를 통한 생활하수 악취 해소 등 도시환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4. ~ 2020. 9.

○ 위 치 : 오류천(오류동역 일대)

○ 규 모 : 암거확장 ▣1@3.0×2.5m~▣2@3.0×3.0, L=1,774m

복개암거 설치 ▣1@9.2~16.8×3.0,  L = 189m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	29,100	20,130	8,970
국 비	1,250	750	500
시 도 비	27,850	19,380	8,470

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 2010.10~2015.12 : 안양천권역 하천기본계획 완료(서울지방국토관리청)

○ 2015. 4~2016.11 : 오류천 단면확장(1,2공구) 실시설계 완료

○ 2016.12~2019. 6 : 오류천 단면확장(1공구) 공사완료

○ 2018.12~2018.12 : 오류천 단면확장(2공구-1차) 공사완료

○ 2019. 2~2019.12 : 오류천 단면확장(2공구-2차) 공사완료

○ 2020. 1~2020. 9 : 오류천 단면확장(2공구-3차) 공사완료

□ 향후계획

○ 2022. 1~2024. 12. : 오류천 단면확장(3공구) 사업 시행

사업명

오류2배수분구 하수관거 종합정비사업

담당자

치수과 박용현(☎860-2262)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오류2배수분구 내 단면부족 및 노후불량 하수관로에 대하여 종합적인

정비사업을 시행하여 수해예방 및 주민불편사항을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 9. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 수궁동, 오류2동 일대

○ 규 모 : 관로 D300mm ~ BOX 3.5×2.5m, L=15.225km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,382백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	39,382	29,630	9,752		-
시 도 비	39,382	29,630	9,752		-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

○ 2012. 4.13.~2013.11. 8. : 실시설계용역 시행

○ 2014. 3.28. : 서울시 투자심사(재투심) 원안가결

○ 2014.10.7.~2019. 8.31. : 오류2배수분구 종합정비사업(2공구-1~5차) 시행

○ 2018.12. 5.~2018.12.31. : 오류2배수분구 종합정비사업(1공구-1차) 완료

○ 2019. 1.16.~2019.12.20. : 오류2배수분구 종합정비사업(1공구-2차) 완료

○ 2019.12.16.~2020. 6.23. : 오류2배수분구 종합정비사업(1공구-3차) 완료

○ 2020. 1.13.~2020.12.20. : 오류2배수분구 종합정비사업(1공구-4차, 3공구) 완료

사업명

고척동 마을공동주차장 조성

담당자

주차관리과 진명정(☎860-2106)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고척동 단독․다가구 주택 밀집지역에 마을공동주차장을 조성해 극심한

주차난을 완화하고 열악한 주차환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~2022. 12.

○ 위 치 : 고척동 52-54 / 고척동 241-21 (2개소)

○ 규 모 : 고척동 52-54 : 2개층 수직증축(5층6단), 43면 증가(총 132면)

고척동 241-21 : 주차면수 22면, 연면적 502㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,080	2,400	-	836	2,844
국 비		-	-	-	-
시 도 비	3,680	-	-	836	2,844
시군구비	2,400	2,400	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40 %)

○ 2019. 2 ~ 2019. 10 : 타당성 조사용역 시행 및 준공

○ 2020. 1 ~ 12 : 도시계획시설 결정 및 대상부지 검토, 주민안내

○ 2020. 4 : 서울시 투자심사

○ 2021. 2. : 고척동 241-21 도시계획시설(주차장)사업 실시계획 인가

○ 2021. 2. : 고척동 52-54 공공건축위원회 심의

○ 2021. 3. : 고척동 241-21 인가고시에 따른 보상의뢰

□ 향후계획

○ 2021. 4. ∼ 8. : 고척동 52-54설계용역 착수 및 완수

○ 2021. 11. ∼ 12. : 보상완료, 공사 착공 및 완공

사업명

구로2동 주택가 공동주차장 조성

담당자

주차관리과 구예니(☎860-2130)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차환경이 열악한 구로2동 지역에 공동주차장을 확충해 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 구로2동 454-1외 10필지(구로변전소 인근 소공원 주변도로 지하)

○ 규 모 : 104면, 지하2층(연면적 : 4,279.48㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,100	-	4,331	7,293	4,476
국 비	2,300	-	1,800	500
시 도 비	3,884	-	2,116	1,768
시군구비	9,916	-	415	5,025	4,476

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2018. 7. : 구로2동 주택가 공동주차장 건설 부지검토안 계획 수립

○ 2019. 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 실시

○ 2020. 3. : 사업비 증액에 대한 시 재투자심사(결과 : 조건부추진)

○ 2020. 4. : 도시계획시설(주차장)사업 실시계획 인가

○ 2020. 7. : 착공

□ 향후계획

○ 2022. 6. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 110억에서 지하 고압 송전선로 추가이설, 제잡비 등 인건비 상승, 이설비 증가 등으로 161억으로 사업예산 증가, 이와 관련해 2020년 3월 시 재투자 심사 완료

사업명

고척동 소규모공영주차장 건설

담당자

주차관리과 배성민(☎860-2131)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고척동 다세대 주택 밀집 지역에 소규모 공영주차장을 조성해 극심한

주차난을 완화하고 열악한 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2 ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 고척동 241-50외 2필지

○ 규 모 : 21면, 연면적 506㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,241백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,241		30	2,141	1,070
국 비
시 도 비	1,275		30	1,245
시군구비	1,966			896	1,070

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 6. : 타당성조사용역 시행

○ 2020. 6. : 사업추진계획 수립

○ 2020. 8. : 재정계획심의위원회(구 투자심사) 심의 (결과: 적정)

○ 2020. 12. ~ 2021. 1. : 중앙토지수용위원회 협의 및 실시계획 인가 고시

○ 2020. 12. ~ 2021. 5. : 설계용역

□ 향후계획

○ ~ 2021. 하반기  : 보상완료

○ 2022. 1. ~ 2022. 12. : 착공 및 준공

사업명

구청사 내진보강 및 외부 리모델링 공사

담당자

총무과 전준영(☎860-3371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 직원 및 구민의 안전을 위한 내진보강

○ 노후된 시설물 안전 확보 및 에너지 효율 개선

○ 구청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 결과에 따른 내진 보강 필요

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 3. ~ 12월

○ 위 치 :  서울시 구로구 가마산로 245 구로구청

○ 규 모 :  연면적 11,031.02㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,871백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,871	-	-	6,871	-
구비	6,871	-	-	6,871	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2017.  7. : 구청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 실시

○ 2018. 10. : 구청사 내진보강 계획 수립

○ 2020.  5. : 내진보강 및 외부리모델링 실시설계

○ 2020.  8. : 구로구 재정계획심의위원회 심의

○ 2020. 12. : 구청사 안전·내진보강 및 외부 리모델링 발주계획

○ 2021.  3. : 착공 및 공사시행

□ 향후계획

○ 2021. 7.~ 2021.12. : 공사진행

○ 2021. 12. : 준공

사업명

개봉2동 주민센터 신축

담당자

자치행정과 김효미 (☎860-2495)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후‧협소한 개봉2동 주민센터를 대체할 신축청사를 건립함으로써, 주민의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 주민자치활동의 구심점을 구축하고 효율적이고 만족도 높은 행정서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2021. 12.

○ 위    치 : 개봉동 261-6 외 2필지

○ 규    모 : 대지면적 851.8㎡, 연면적 2,053㎡, 지하1층/지상4층

○ 용    도 : 동 주민센터, 자치회관, 작은도서관(마을문고) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,114백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년
계	8,114	1,726	953	5,435
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	6,203	1,726	177	4,300
특별교부금	1,911		776	1,135

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 1. 23 : 개봉2동 주민센터 신축 계획 수립

○ 2018. 10.  2 : 서울시 투자심사

○ 2019. 4. 30 ~ 11. 26. : 실시설계 용역

○ 2019. 12. ~ 2020. 2. : 공종별 계약 심사 및 공사 발주

○ 2020. 3. 30. : 착공 (‘20.6월 말 철거완료)

○ 2020. 6. ~ 7. : 철거공사 및 폐기물 반출

○ 2020. 8. : 철거공법 변경(인접 건축물 안전성 확보) 및 철거공사 중

○ 2020. 12. :  가시설 설치 및 터파기 공사 완료

□ 향후계획

○ 2021. 1 ~ 2021. 12. : 준공 및 신청사 개청

□ 사업변경 내역

○ 사업부지 인근지역의 주차난을 경감시키고자 지하주차장 최대 면수 확보

( 연면적 증가 : 1,856㎡ → 2,053㎡ / 사업기간 약 4개월 연장)

○ 철거 및 터파기 단계에서 인접지역 안전성 보강 작업 및 차수공정 추가로 사업기간 증가

사업명

항동 복합행정센터 건립

담당자

자치행정과 김효미(☎860-2495)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020.01.01.字 항동 신설에 따라 항동주민센터 및 다양한 주민편의시설을 포함하는 복합행정센터를 건립하여 항동 주민의 행정편의 증진을 도모하고주민활동의 구심점 마련

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 3 ~ 2022. 7.

○ 위    치 : 구로구 항동 176-2

○ 규    모 : 대지면적 2,308㎡, 연면적 2,303㎡(지하1층/지상4층)

○ 용    도 : 동주민센터, 자치회관, 융합형 돌봄센터, 작은도서관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,555백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,555	509	984	8,552	2,510
시 도 비		-	-	-	-
시군구비	9,913	509	984	5,910	2,510
특별교부금	1,842	-	-	1,842	-
특별교부세	800	-	-	800	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 3. 1. : 항동복합행정센터 건립 기본계획 수립

○ 2019. 7. 25. : 서울시 투자심사

○ 2019. 1. 1. : 토지매매계약 체결

○ 2020. 2. ~ 12. : 실시설계 용역

○ 2021. 1. : 실시설계용역 준공

○ 2021. 2. : 특정제품심사, 특정기술협약 등 행정절차 수행

○ 2021. 3. ~ 4. : 일상감사, 계약심사, 건설사업관리용역 사업수행행능력 평가 등

□ 향후계획

○ 2021. 5. ~ 2022. 7. : 공사시행 및 신청사 개청

사업명

구로G페스티벌

담당자

문화관광과 정인환(☎860-2060)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리구 대표축제로 지역활성화 및 구민통합을 통해 구민들에게 생활의

활력과 문화향유의 기회를 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. 1. ~ 9. 27.

○ 위 치 : 구로구민회관, 오류아트홀, 스마트구로홍보관 등 구로구 일대

○ 규 모 : 주민자치프로그램 발표회, 맛있는 아시아, 주민영상·사진 공모,

온라인라이브 콘서트, AR체험 등 온라인·비대면 축제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,244백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,244	3,168	638	638	800
국 비	1,920	1,920	-	-	-
시 도 비	1,070	240	255	255	320
시군구비	2,254	1,008	383	383	480

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 3.～ 4. 기본계획수립

○ 2019. 5.～ 7. 기획사 선정

○ 2019. 6.～ 8. 세부계획수립, 전면온라인 전환

○ 2019. 9.～10. 행사 개최 및 정산 (사후평가)

□ 향후계획

○ 2021. 10. 1.~2021. 10. 3. 축제개최

○ 2021. 10. ~ 2021. 12. 정산 및 평가

사업명

항동 산18-2번지 도서관건립

담당자

문화관광과 주형우(☎860-3363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대규모 공공주택건설사업으로 항동 지역의 인구가 급격히 증가하였으나, 절대적으로 부족한 주민편의시설(도서관)을 확충하여 지역주민의 도서문화 이용수요를 충족하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2022. 3.

○ 위 치 : 서울시 구로구 항동 산 18-2번지 푸른수목원 내

○ 규 모 : 연면적 908㎡( 지상2층 )

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,161백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,161	37	88	2,000	3,036
국 비	2,456	-	-	1,200	1,256
시 도 비	765	37	-	728	-
시군구비	1,940	-	88	72	1,780

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 2018. 9 : 기본설계 실시

○ 2019. 6. 21. : 성공회대학교 설계 기증 협약

○ 2019. 7. ~ 11. : 기본설계용역

○ 2019. 12. 3. : 공유재산 심의 및 관리계획 수립

○ 2020.  6. 18. : 市도시공원위원회 심의 재상정

○ 2020.  7. : 실시설계 착수

○ 2021.  1. : 실시설계 완료

○ 2021.  4. : 건설사업관리계획 수립

○ 2021.  6. : 착공

□ 향후계획

○ 2022. 3. : 준공

사업명

개봉1동 돌봄특화 도서관 건립

담당자

문화관광과 원재웅(☎860-3036)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구로구 교육시설 밀집지역으로 젊은 층의 유동인구가 많으나, 주민편의시설이 부족한 개봉1동에 지역 내 공공도서관을 건립하여 지역주민의 삶의 질 향상에 이바지 하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 구로구 고척로19길 69-52(개봉동 15-1)

○ 규 모 : 부지면적 221㎡, 연면적 400㎡*(지상4층)

※ 도서관 270㎡, 다함께돌봄 130㎡

○ 총사업비 : 3,442백만원(국비 463 시비 327 특교금 1,000 구비 1,652)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,442백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,442	-	-	1,348	2,094
국 비	463	-	-	-	463
시 도 비	1,327	-	-	-	1,327
시군구비	1,652	-	-	1,348	304

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 5. 23. : 기본계획수립

○ 2019. 4. ~ 7. : 감정평가의뢰[3개소] →  수임포기

○ 2019. 7.17. : 도시계획시설사업 실시계획인가처분 취소청구[주)고강]

○ 2019. 9. 3. : 제2차 재정계획심의위원회(구 투자심사) 심의(적정)

○ 2019.10. 8. : 생활SOC 복합화 대상시설 선정

○ 2019.10.28. : 행정심판청구 취하[주)고강 사내이사 변경]

○ 2020. 1.30. : 실시계획변경인가 고시

○ 2020. 3. ~ : 보상절차 재진행 중-건설관리과

○ 2020. 7. : 한국감정원 감정평가업무 위·수탁 체결

□ 향후계획

○ 2021. 하반기 : 보상완료, 건축 및 철거설계 용역

○ 2022. 상반기 : 착공

○ 2022. 하반기 : 준공

사업명

KBS송신소부지 복합문화타운 건립

담당자

문화관광과 주형우(☎860-3363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공인프라가 부족한 개봉동 지역 내에 거점 도서관, 거점형 마을활력소, 다함께돌봄센터, 평생학습관 등을 포함한 복합문화타운을 건립하여 서남권의 문화‧교육 중심지로 거듭나게하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8 ~ 2023. 8

○ 위 치 : 서울시 구로구 개봉동 195-6

○ 규 모 : 2개동 예정(총 연면적 7,000㎡)

(도서관동 지상 4층 연면적 4,600㎡ / 문화센터동 지상3층 연면적 2,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,875백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,875	-	3	750	22,122
국 비	3,040	-	-	750	2,290
시 도 비	3,893	-	-	-	3,893
시군구비	15,942	-	3	-	15,939

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 2019.10. 7. : 생활SOC 복합화사업 최종선정

○ 2019.10.25. : 지방재정영향 평가(조건부 추진)

○ 2019.12. 6. : 중앙투자심사 결과(조건부 추진)

○ 2020. 5. 7 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료

○ 2020. 9.17 : 공공건축 심의위원회 의결

○ 2021. 2.19 : 설계공모 시행

○ 2021. 5.26 : 설계공모 작품심사

○ 2021. 6.21 : 설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 상반기 : 설계완료 및 착공

○ 2023. 하반기 : 준공

사업명

구로1-4번지 유수지 내 도서관 건립

담당자

문화관광과 김태용(☎860-3036)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유동인구가 많은 신도림역과 인접한 구로동 1-4번지(유수지)에

주민편의시설인 공공도서관을 건립 운영하여 지역주민 및 서울시민의

문화시설 염원을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.12. ~ 2023.1.

○ 위 치 : 구로구 구로동 1-4번지(구로1유수지 상부)

○ 규 모 : 지상 4층(연면적 1,500㎡), 부지 600㎡(구유지)

○ 배 치 : 열람실, 디지털자료실, 프로그램실, 스터디룸, 문서고 등

○ 총사업비 : 10,144백만원(국비 2,400 시비 2,110 특교 3,000 구비 2,634)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,144백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,144	45	37	3,473	6,589
국 비	2,400	-	-	1,500	900
시 도 비	2,110	-	-	1,500	610
시군구비	5,634	45	37	473	5,079

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018.12. : 도서관 건립 기본계획 수립

○ 2019. 3. : 2019년 공공도서관 건립 타당성 검토 결과-적정 통보(문체부→구)

○ 2019. 8. 2. : 시투자심사결과 적정 통보(조건부추진)

○ 2019.10. 2. : 특별교부금 교부(2,000백만원)

○ 2019.10.25. : 중기지방재정계획 수립

○ 2019.11.12. : 구로구 공유재산심의회-적정

○ 2019.11.14. : 구로구 도시계획위원회(문화시설 중복결정)-원안가결

○ 2019.12. 3. : 공유재산 관리계획 수립

○ 2020. 4. : 국가공공건축지원 센터 사업계획서 사업 사전 검토(완료)

○ 2020. 7. 15. : 공공건축 심의위원회(구 건축위원회) 심의

○ 2020.10. 17. : 설계공모(건축 및 인테리어 공동) 실시

○ 2021. 1. 20. : 설계공모 완료

○ 2021. 2월 : 설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021.11. : 설계용역 완수

○ 2021.12. : 착공

○ 2023. 1. : 준공

사업명

구로5동 구민생활체육관 현대화사업

담당자

체육진흥과 이순덕(☎860-3365)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구로구민생활체육관의 현대화(신축)로 쾌적한 체육시설 환경제공을 통한 주민 생활체육활동 증진과 시설물의 효율적인 유지관리를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.12. ~ 2021.12.

○ 위 치 : 새말로18길31(구로동50-9외 6)

○ 규 모 : 연면적 1,670.56㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,644백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,644	142	2	3,431	69
국 비	1,000	77	2	921
시 도 비	2,500	-	-	2,500	-
시군구비	144	65	-	10	69

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2020. 6.10. : 실시설계용역 착수

○ 2020.11.03. : 지하철안정성 검토 용역 착수

○ 2021. 8.24. : 지하철안정성 검토 완수(예정)

○ 2021. 8.24. : 실시설계용역 완수(예정)

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 착공(예정)

○ 2022. 10. : 준공(예정)

사업명

구로구 항동 생활체육관 건립

담당자

체육진흥과 이순덕(☎860-3365)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활 인프라가 부족한 천왕, 항동지역의 대단위 주택잔지 조성으로 생활체육인구 급증이 예상됨에 따라 적기에 체육시설물을 확충하여 지역 주민의 건강한 생활체육 및 건전한 여가 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.12. ~ 2020. 4.11.

○ 위 치 : 항동 공공주택지구 제1체육공원 내(항동로24)

○ 규 모 : 연면적 2,884㎡(지하2층/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,234백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,234	4,140	7,094		-
국 비	2,740	223	2,517		-
시 도 비	5,055	2,943	2,112		-
시군구비	3,439	974	2,465

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2018.12. 3. : 착공

○ 2020. 4.11. : 준공

○ 2020. 6. : 개관(코로나19 상황에 따라 탄력적 운영)

사업명

신도림차고지 체육시설 조성

담당자

체육진흥과 이순덕(☎860-3365)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신도림 청소차 차고지 이전에 따른 유휴공간을 활용하여 다목적 실내체육관을 건립하고 향후 일정규모의 대회도 개최하는 등 지역주민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.11. ~ 2022.12.

○ 위 치 : 신도림동301일원(청소과 차고지 이전부지)

○ 규 모 : 연면적 3,067.09㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,210	44	224	5,567	6,375
국 비	3,000	-	224	1,375	1,401
시 도 비	2,910	-	-	2,037	873
시군구비	6,300	44	-	2,155	4,101

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2020. 5.11. : 실시설계용역 착수

○ 2020.10.11. : 도시계획중복결정 용역 착수

○ 2021. 7.15. : 도시계획중복결정 용역 완수(예정)

○ 2021. 9. 2. : 실시설계용역 완수(예정)

□ 향후계획

○ 2021.10. : 착공(예정)

○ 2022.12. : 준공(예정)

사업명

구로구민체육센터 리모델링

담당자

체육진흥과 조태영(☎860-2023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 리모델링을 통한 신축 수준의 체육시설 조성, 노후 된 시설에 대한 성능개선으로 구민의 다양한 욕구 충족, 쾌적한 체육시설 환경 제공을 통한 주민 생활체육활동 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 3.

○ 위 치 : 구로구 고척로45길 39

○ 규 모 : 외벽교체, 공간 재배치, 수영장등 전체 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	-	50	3,450	1,500
국 비	2,500	-	50	2,450
시 도 비
시군구비	2,500			1,000	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 2. 5. : 정밀안전진단용역 착수

○ 2021. 3. 6. : 정밀안전진단용역 완수

○ 2021. 6.17. : 실시설계용역 착수

○ 2021. 9.14.  : 실시설계용역 완수(예정)

□ 향후계획

○ 2021.10. : 착공(예정)

○ 2022. 3. : 준공(예정)

사업명

항동 근린공원 보상

담당자

녹색도시과 윤지영(☎860-3114)

□ 사업목적 및 필요성

○ 항동근린공원은 보상 요구민원이 끊임없이 제기된 장기미집행 도시계획시설(공원) 으로 공원시설(올레길, 체육시설, 파고라 등)이 이미 설치되어 있어 주민들의 이용이 많은 곳으로 시설지역 우선 (분할)보상이 필요함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019. 1. ~ 2021. 4.

○ 위    치 : 서울시 구로구 항동 산12-1 일대

○ 규    모 : 10,701㎡

○ 사업내용 : 토지보상(6필지) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,540	-	3,084	3,456	-
시 도 비	3,240	-	1,542	1,698	-
시군구비	3,300	-	1,542	1,758	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2020.  3. 12. : 실시계획인가 고시

○ 2020.  4.  9. : 토지보상 의뢰(→건설관리과)

○ 2020.  9. 20. : 보상협의(3필지 완료)

○ 2020. 10. 27. : 수용재결 신청(3필지)

□ 추진계획

○ 2021. 2. : 수용재결 완료(3필지)

○ 2021. 3. ~ 4. : 보상완료 및 소유권 등기이전

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 5,000백만원 → 변경 6,540백만원

○ 사업기간 : 당초 2019~2020 → 변경 2019~2021